시 방 서

□ 공사명 : 울산벤처빌딩 지하주차장 도장공사

□ 위  치 : 울산광역시 남구 옥현로 129 울산벤처빌딩

□ 목  적 : 지하주차장의 균열, 누수를 보수하여 건물의 장기보존 및 식              각적 불쾌요소 제거를 위함

□ 공사기간 : 착공일로부터 14일간

(단, 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 얻어 공기를 연장할 수 있다.)

가. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

나. 발주처의 지시에 의해 작업이 중단되었을 때

다. 기타 부득이한 사정으로 인하여 공사가 불가능하다고 인정될 때

□ 공사내용 및 방법

○ 공사범위

(단위 : ㎡)

위 치(면적)		A. 도장공사
		도 장	균열보수	방수작업
합 계	1,493.1	762.2	1493.1	730.9
지하 1층	외벽(395.8)	○	○	-
	내벽(140.8)	○	○	-
지하 2층	외벽(353.6)	-	○	○
	내벽(140.8)	○	○	-
지하 3층	외벽(377.3)	-	○	○
	내벽( 84.8)	○	○	-

○ 실공사면적

- 도    장 : 762.3㎡

- 균열보수 : 공사범위의 10%(150m) 정도

- 방수작업 : 공사범위의 5%(36m) 정도

○ 세부 공사내용

- 1층 도시가스 배관 기존 도장 제거 및 재 도장

- 지하 전층 내벽 및 지하 1층 외벽 도장

- 지하 전층 벽체 바탕면 정리 작업(도색 및 방습패널 설치 대비)

- 지하 전체 미장 들뜸 부분 보수 : 6개소 정도

- 균열 및 방수작업

․지하 전층 내벽은 도장작업을 위한 균열보수

․지하 1층 외벽 : 건물장기보존 및 도장을 위한 보수

․지하 2, 3층 외벽 : 누수되는 곳은 방수작업, 누수는 없으나 균열이           심한 곳은 균열보수작업 ※ 세부공사 물량은 감독관과 협의 후 결정

(바닥컷팅 포함)

○ 공사방식

- 도    장 : 수성페인트 2회 이상

※ 도시가스 배관은 별도 용도에 맞는 페인트 선정

- 바탕면 정리 : 이물질, 페인트 및 미장 불량부분 제거작업

- 미장들뜸 : 미장제거 후 재 미장

- 균열보수 : V커팅 후 퍼티

- 방수작업 : V커팅 후 우레탄

- 바닥컷팅 : 길이 6.6m 폭 20mm, 깊이 20mm 이상으로 바닥을 컷팅하여                   벽체에서 발생된 유출수가 바닥커팅부분을 통해 자연스럽게                   배수로로 흐르게 하여야 함

○ 특이사항

- 현장방문을 필수이며 진흥원 담당자와 균열, 방수, 미장들뜸 작업량을 확        인하여야 함

- 미장들뜸 표시는 상태가 심한곳으로 바탕면 정리 작업 후 발견되는 공사가         필요한 미장들뜸부분은 계약업체의 부담으로 진행한다.

- 균열보수 및 방수작업도 바탕면 정리 작업 후 발견되는 공사가 필요한         부분은 계약업체의 부담으로 진행한다.

□ 일반사항

○ 계약업체는 공사에 앞서 현장여건을 면밀히 검토 파악하여 시공에 차질이       없도록 한다.

○ 본 공사에 사용하는 자재는 K.S 표시제품 사용을 원칙으로 하며 K.S 제품이       없을 시는 동등이상의 제품을 사용토록 하여야 한다.

○ 계약일로부터 5일이내 착공계 제출 준공 후 5일이내 준공계(사진첨부)를       제출하여야 한다.

○ 계약업체는 청구 시 국세 및 지방세 납입 증명서를 제출하여야 한다.

※ 미납금 있을 시 공사대금 지급 불가

○ 본 공사 시행중 발생한 타 공작물의 파손 손괴 시는 계약자가 책임지고       원상복구 하여야 한다.

○ 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 매설 은폐된 곳의 경우에는 반드시       감독관의 입회 하에 시공하여야 한다.

○ 본 설계에 포함되지 않아도 설치 후 효율적인 관리를 위한 경미한 추가       공사 필요시 계약업체의 부담으로 추가공사를 진행한다.

○ 감독관의 승인 및 검수를 받지 않은 제품은 즉시 현장에서 반출해야 하며       이에 따른 경비는 계약자 부담으로 한다.

○ 계약자는 물품의 제작, 반입 및 설치 시 발생되는 모든 안전조치를 취함은       물론 이에 모든 안전사고에 대한 책임을 진다.